설계용역 과업지시서

광주수피아여중 본관동 지붕 방수공사 설계용역

2021. 11.

광주수피아여자중학교

과 업 지 시 서

□ 설계용역개요

1. 용역명: 광주수피아여중 본관동 지붕 방수공사 설계용역 (공사명은 추후 변경 가능)

2. 사업목적: 쾌적하고 안전한 교육환경을 제공하고자 함.

3. 사업개요

(단위: 천 원)

학교명	사업내용	규모	총사업비	비고
광주수피아 여중	본관동 지붕방수	677[eqn: m^{ 2}]	92,749	손해배상 공제포함

3.총 사업비: 건축, 토목, 기계설비, 전기. 통신. 소방공사 및 부대시설공사 포함

4. 설계용역비(기초금액): 92,749천 원

5. 용역내용: 기본설계+실시설계(기본계획안 및 부대시설 포함)

6. 용역기간: 착수일로부터 30일 간(착수일은 계약일로부터 7일 이내)

구 분	설계 세부과정	소요기간(일)	비 고
현장조사	현장조사 및 누수원인 파악	10
실시설계	설계협의회(신기술 공법 선정위원회) 실시	10
	실시 설계도서 작성 및 검토	5
	최종 설계도서 검토 및 보안	5
합 계		30

※ 신기술 공법 선정위원회 개최 시 필요서류(현장조사보고서, 사진대장, 설계도면) 제출

□ 과업내용

1. 건축 등 해당 분야에 대한 설계용역을 수행한다.

2. 계약일로부터 7일 이내에 착수계, 설계 예정 공정표 및 본 용역에 참여 해당하는      건축사 등 분야별 책임기술자의 면허증 사본과 이력서를 제출한다.

가. 착수계

- 사업 책임기술자 선임계

- 예정 공정표

- 과업수행계획서

- 보안각서

- 용역비 산출내역서

3. 현장조사 및 기본설계(안) 작성 시 사용자를 대상으로 의견을 수렴 및 취합하여 설계 반영 여부를 우리학교 기술진과 협의하고 그 결과를 보고한다.

4. 계약상대자는 현장을 조사하여(붙임 현장조사 보고서 작성) 현장여건 및 규모에 적합하고 경제성, 시공성, 안전성, 유지관리성, 환경성 등을 종합적으로 비교 검토한 후 특정(신기술) 공법 적용여부를 제시한다.

※ 금차 공사로 인하여 간섭되는 주변 시설물 등의 지장 여부를 확인하여야 한다.

5. 우리학교에서 신기술 공법 선정위원회를 개최 할 경우 도급자(설계자)는 동 업무에 지장이 없도록 모든 관련서류나 회의자료를 준비하여야 한다.

6. 공법 선정 등『신기술 공법 선정위원회』운영

1) 계약상대자는 신기술 등 특정 업체의 자재 및 공법선정시 광주광역시교육청 신기술 공법 선정위원회 구성에 따라 공법 선정하여야 한다.

2) 계약상대자는 신기술 공법 선정위원회의 필요한 심의자료를 준비하여 제출하여야 한다.

3) 본 과업수행 중 우리학교는 상기 내용외에 필요할 경우 본 과업의 설계 사항을 수시 검토할 수 있으며, 이에 대한 필요한 자료는 계약상대자가 준비하여야 한다.

4) 특정공법 사용 시에는 『광주광역시교육청 신기술 공법 선정위원회 구성 및 운영 지침』에 의거 최종 설계도면을 작성한다.

5) 필요 시 설계협의회(신기술 공법 선정위원회)에서 현장조사 설명을 한다.

7. 설계도서 작성기준은 [국토교통부고시 제2016-1025호(2016. 12. 30.) 건축물의 설계도서 작성기준]을 참고하여 작성한다.

□ 설계추진시 유의사항

1. 경제적인 구조와 열손실을 방지토록 계획한다.

2. 반드시 학교를 실사(학교장 및 담당교사의 의견 수렴)하고 시설 설치 여부를 확인

하고 기본계획안을 작성하여 우리학교의 기술진의 확인검사를 받는다.

3. 마감자재는 내구성 및 안전성, 경제성을 고려하여 계획하며, 친환경 자재사용을 원칙으로 한다.

4. 재료의 색상 및 질감 등은 사용자의 성별 및 연령에 따라 실용도, 내구성 등을 감안하여 계획한다.

5. 설계자는 우리학교에서 제시하는 설계 지시사항 전반에 대하여 숙지한 후 충분한 자료를 분석 수립하여 원활한 기능이 이루어지도록 하고 건축사 고유의 창작이 이루어지도록 한다.

6. 실시설계에 표시해야 할 사항

1) 설계설명서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공종별 공사비 등

- 설계개요 : 지역․지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률 등

- 공사비 산정(공종별 물량 및 공사비)

- 세부 (공정․설비․자재)계획, 기타 필요사항

2) 시방서

- 일반 시방서, (필요시 특기 시방서 포함)

※시방서에 건설산업기본법 건설업이 업종과 업종별 업무내용에 따른 업종별 분류하여 해당 공사의 입찰참가자격 시공분야를 백분율로 명시

→ 총 사업비에 따른 주 공종의 비율을 시방서에 명시

→ (시방서 예시) 본 공사는 건설산업기본법 업종별 업무내용에 따른 업종별로 철근·콘크리트 공사업(70%), 포장공사업(20%) 습식·공사업(10%)으로 구성하고 있음

3) 설계도면

- 배치도, 평면도, 각층 평면도, 지붕 평면도, 주단면도, 주단면 상세도, 입면도 등

7. 각종 재료의 선택은 시설물별 특성을 고려하여 내구성, 내마모성, 색상, 질감, 무늬 등이 적합한 재료를 선택하며, 특정제품을 지칭하는 상호, 명칭 등은 표기할 수 없다.

8. 재료마감표 및 입면도에는 건축자재 성능 및 품명, 규격, 재질, 질감, 색상 등을 구체적으로 표기한다(건축법 시행규칙 제14조).

□ 성과품 납품

1. 계약대상자는 설계용역 준공예정일 15일 전에 납품목록 및 최종성과품에 대한 원고 1부씩을 제출하여 예비검사를 받아야 하며, 수정이 필요한 부분은 협의하여 수정하여야 한다.

2. 최종 성과품 제출은 예비검사 등 모든 검토, 협의, 승인 등이 완료 된 후 과업수행 종료일 전에 납품하여야 한다.

3. 설계 완료시 모든 과업 성과품을 CD에 일괄 저장하여 납품하고, 내역서는 [조달청 공사원가 호환규정 및 코드]를 준수하여 작성된 설계내역전산파일을 포함하여 제출한다.

4. 설계도서 납품내용(각 학교별 별도작성 제출)

번호	명 칭	크 기	부 수	용 도	비 고
1	설계도서 총괄 파일본	CD ※ USB 메모리 대처 가능	2EA(총괄)	보관용	PDF파일(도면-건축사 도장 날인), 현장조사 사진, 내역 적산프로그램파일 포함
2	납품용	A4상철	2부(총괄)	납품용, 보관용	도면, 시방서, 내역(일위대가, 수량산출서 포함) 묶음
3	공사집행용	A4상철	2부(분야별)	발주용	도면 및 시방서 묶음, 내역서 별도
4	도 면	A3▹A4반책	3부(분야별)	감독, 학교, 시공용
5	공사 시방서	A4상철	3부(분야별)	감독, 학교, 시공용
6	공사비내역서	A4상철	3부	감독, 감독, 시공용
7	일위대가표	A4상철	2부	감독, 보관용
8	수량산출서	A4상철	2부	감독, 보관용
9	신기술적용 검토조서	A4상철	2부	납품용

□ 유의사항

1. 우리학교에서 설계도서가 필요하여 요구할 때 용역자는 요구 양식의 설계도서를 제공하여야 한다.

2. 설계납품 후 설계와 시공이 상이한 부분(구조, 마감 및 물량변경 등)이 발생될 경우 공사 감독공무원의 요청이 있을시 지체 없이 상이한 부분에 대하여 검토하고, 그 결과를 감독공무원에게 회보토록 한다.

3. 본설계도서 내용의 하자로 국고에 손실이 발생할 때에는 용역자가 변상한다.

4. 설계용역비는 추정공사비보다 실지 설계 소요공사비가 초과될 경우 용역비를 증액할 수 없으며, 5%이상 부족 시에는 정산처리 함을 원칙으로 한다.

5. 본설계도서의 소유권과 저작권은 우리 학교에 귀속된다.

6. 설계용역비의 지불은 담당공무원의 검수조서에 의하여 지불한다.

7. 도급자는 납품 시 각종 계산서 및 산출서에 대한 책임을 져야 하며, 비경제적이고 불리한 설계로 판단될 경우 즉시 도급자 부담으로 수정 또는 보충설계를 하여야 한다.

8. 설계에 필요한 각종 조사 및 시험 등에 필요한 비용은 도급자가 부담한다.

9. 본 과업지시서에 명시된 사항은 설계자 임의로 해석될 수 없으며, 지침의 내용이 불분명하거나 누락 및 오기된 경우에는 발주청과 협의하여 처리하되 의견이 불일치 될 경우 과업지시서와 관련규정상 그 규제내용이 강화된 것을 따른다.

10. 건축 등에 관한 설계기준은 관련법규, 제반규정, 지침, 조례, 정부제정 시방서 등과 본 과업지시서에서 규제한 기준 이상으로 하며, 서로 상이한 경우에는 그 규제 내용이 강화된 것을 따른다.

11. 본 과업지시서에 제시한 마감, 부착물, 설비 등의 자재, 공법은 최소한도의 기준을 명시한 것으로 설치 및 시공된 후에 동등이상의 성능을 확보할 수 있는 것이어야 한다.

□ 관련법규 검토

1. [건축법], [학교시설 내진설계기준], [녹색건축물 조성 지원법]

3. [학교시설사업촉진법], [학교보건법], [학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률]

4. [장애인․노인․임산부 등의 편의 증진에 관한 법률]

5. [소방기본법], [소방시설공사업법]

6. [건축전기설비 설계기준], [전기공사사업법], [정보통신공사사업법]

7. [건축물의 설비기준 등에 관한 규칙], [건축물의 냉난방설비에 대한 설치 및 설계기준]

5. [신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급촉진법], [에너지이용 합리화법]

6. [설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침]

7. 기타 학교시설물에 관련된 법률 및 규정준수

[착수신고서 (설계감리업무 수행지침 별지 제1호 서식)]

착 수 신 고 서

계  약  건  명 :

계  약  금  액 :

계 약 년 월 일 :

착 수 년 월 일 :

준  공  기  한 :

붙임 : 설계용역 투입계획

상기와 같이 착수하였기에 착수신고서를 제출합니다.

년     월     일

광주수피아여자중학교장 귀하

책임기술자 선임계

1. 용 역 명:

2. 계약금액:

3. 계약일자: 200 .   .   .

4. 착수일자: 200 .   .   .

5. 완수예정일: 200 .   .   .

-  아                      래  -

가. 성        명:

나. 주        소:

다. 주민등록번호:

라. 기술자격(면허)종별 :

상기인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임: 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

200 .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

광주수피아여자중학교장 귀하

보  안  각  서

○ 계약건명:

○ 계약기간:        년    월    일 ∼  년    월    일

○ 계약금액:

본인은 상기 과업을 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 서약하고 이에 본 각서를 제출합니다.

1. 본인은 과업수행에 있어 계약서 및 과업내용서상의 제반 보안사항을 철저히 수행할 것을 서약한다.

2. 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기 시켰을 경우에는 보안관계 제법 규정에 의거 처벌받음은 물론 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것을 서약한다.

200 .  .

서약자     주      소:

회  사  명:

대  표  자:

법인(사업자)등록번호:

전 화 번 호:

광주수피아여자중학교장 귀하

설계용역 참여기술자 명단

(수행계획서, 종합보고서에 첨부)

ㅇ용 역 명:

ㅇ용역기간:

ㅇ도 급 자(회사명 및 대표자 명기):

ㅇ용역참여자(총괄․분야별 책임 및 참여기술자)

연별	분야별	설계참여기술자					비고
		참여세부 과업내용	참여기간	성 명	생년월일	자격종목 및 등급

※ 참고 : 준공표지판 표기가 가능토록 상세히 기재요

설계용역  준공검사원

1. 설계용역명:

2. 계약금액:

3. 계약 연월일:

4. 착공 연월일:

6. 준공기한:

7. 실지 준공 연월일:

8. 첨부서류: 납품설계도서 목록 1부.

위 설계용역의 시행에 있어서 전반에 걸쳐 계약서, 설계기준 및 기타 약정대로 어김없이 준공되었음을 확인하오며 만약 설계용역의 설계 감리에 관하여 하자가 발견될 시는 즉시 실액 변상 또는 재수행할 것을 서약하고 이에 준공검사원을 제출합니다.

년     월    일

주  소:

상  호:

성  명:

광주수피아여자중학교장 귀하

신기술적용 검토조서
용 역 명
상호명(설계자)
예 산 액	금 원정		(￦ )
계 약 일	년 월 일	완료기한	년 월 일
착 수 일	년 월 일	완 료 일	년 월 일
검토의견
20 년 월 일 검 토 자: (상호명) 성 명: (인)

현장조사 보고서

1. 사 업 명:   O O 학교 교사동 방수공사

2. 조 사 자:   (예시)㈜서부 건축사사무소 O O O  (인)

3. 개선시설 현황

구분		내용
건물	건물명
	연면적
	준공년도
방수	옥상면적
	기존 방수층
	옥상 지장물
보수 현황	누수부위
	누수원인
	보수예정면적
조사의견(특이사항 포함)

4. 특정(신기술) 공법 적용 검토내용

구 분	신기술 설계 적용 검토내용
종합 결론 (시공성, 경제성, 안전성, 유지관리성, 환경성)

5. 현황 사진